물왕공원 도시관리계획 결정을 위한 의견청취의 건

시    흥    시

물왕공원 도시관리계획 결정을 위한 의견청취의 건

의 안 번 호	2980		제출년월일 : 2018. 11. .
			제 출 자 : 시 흥 시 장

1. 사업개요

○ 사 업 명 : 물왕공원 조성사업

- 의회 의견청취 대상 : 시흥 도시관리계획(공간시설:수변공원) 결정

○ 위    치 : 산현동 202-2번지 일원

○ 사업시행자 : 시흥시

○ 사업규모 : 59,860㎡

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년

○ 추정사업비 : 13,087백만원(조성비 4,500 토지보상비 8,420, 용역 167)

※ 지장물 보상비 등 추가에 따라 총사업비 변동가능

○ 도시계획사항 : 개발제한구역, 자연녹지지역

2. 사업목적

○ 물왕근린공원(2018. 8월 자동실효)의 대체시설 확보로 물왕저수지 주변의 수려한 경관과 자연환경 보전 및 주민 여가‧휴식공간 제공

3. 도시관리계획(공간시설:수변공원) 결정(안)

○ 공원 결정 조서

구분	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일
			기정	변경	변경후
신설	수변공원	산현동 202-2번지 일원	-	59,860	59,860	-

○ 공원 (변경)결정 사유서

시설명	결정내용	결정사유
수변공원	• 수변공원 신설 - 위치 : 시흥시 산현동 202-2번지 일원 - 면적 : 59,860㎡	• 수려한 자연경관을 체계적으로 보전‧관리하고 지역주민의 여가휴식공간 제공을 위하여 도시관리계획 결정 추진

4. 추진경위

○ 2017. 11월 : 시의회 의견청취(물왕근린공원 축소 및 주제공원 신설)

○ 2017.  2월 : 주민공람공고(물왕근린공원 축소 및 주제공원 신설)

- 주민의견 : 원안유지, 최대한 면적 확대 요청 다수

○ 2018.  3월 : 도시관리계획 결정(변경) 신청(승인권자 : 도지사)

○ 2018.  4월 : 도시관리계획 결정(변경) 신청 취하

○ 2018.  5월 : 주민설명회(주민자치위원 5, 목감지구 4, 토지주 등 5)

○ 2018.  6월 : 물왕공원 구획계 재검토

○ 2018.  8월 : 물왕근린공원 자동실효

○ 2018.  9월 : 주민설명회(주민자치위원 등 주민 15인)

5. 향후계획

○ 2018. 11월 : 주민공람 및 도시관리계획 결정신청(승인권자 : 시장)

○ 2018. 12월 : 시 도시계획위원회 심의

○ 2019.  1월 : 보상계획 공고, 용역 계약심사 및 일상감사

○ 2019.  2월 : 협의보상 추진, 실시설계 용역 착수

○ 2019.  6월 : 실시계획 인가, 계약심사

○ 2019.  8월 : 공사발주 및 착공

○ 2020.  5월 : 준공

작성자	공원관리과장 백종만 / 공원조성팀장 권순권 / 주무관 김미성 (☎310-2346)