서면질문

생활체육시설 조성

추진현황 및 향후 대책

제261회 시흥시의회(제2차 정례회) 시정질문

체 육 진 흥 과

생활체육시설 조성 추진현황 및 향후 대책 (성훈창 의원)

【질문내용】

○ 2014년 9월경 장곡동, 목감동, 신천동에 조성하기로 한 생활체육시설이 계획 수립 후, 해당 주민에게 홍보만 되고 4년이 넘도록 실행되지 않고 있음.

○ 상기 생활체육시설의 추진상황과 향후 계획, 또한 계속해서 지연되고

있는 이유는 무엇이며, 착공시기는 정확히 언제인지?

○ 토지매입비는 시간이 지날수록 상승하기 마련인 바, 순차적으로라도

빠른 토지매입이 이루어져야 할 것으로 보임.

이에 대한 시정부의 대책은?

□ 답변내용

○ 거점별 생활체육시설(장곡동, 신천동, 목감동) 조성사업은 시민들의 복지와 여가생활 활동을 위해 필요한 기반시설을 지역별로 체계적이고 균형적으로 확충하고자

○ 『시흥시 제2차 체육시설 확충 및 생활체육활성화 5개년 계획

(2016년~2020)』에 의거 추진 중인 사업으로

총 사업비는 552억원(토지보상비 275억원, 공사비 277억원)입니다.

○ 장곡동 생활체육시설은 장곡동 658-16 일원 25,790㎡ 부지에  축구장, 풋살구장, 족구장, 실내체육시설 등을 조성할 계획으로 조성비는 144억원(토지보상비 76억원, 공사비 68억원)이며

○ 목감동 생활체육시설은 논곡동 197-26 일원 45,600㎡ 부지에  축구장, 야구장, 실내체육시설 등을 조성할 계획으로 조성비는 218억원(토지보상비 98억원, 공사비 120억원)입니다.

○ 또한 신천동 생활체육시설은 신천동 518-5 일원 25,790㎡ 부지에 축구장, 실내체육시설 등을 조성할 계획으로 조성비는 190억원 (토지보상비 101억원, 공사비 89억원)입니다.

○ 그동안 추진사항을 말씀드리면

2014년도에 생활체육시설 조성계획을 수립하여

2015년도에는 사업설명회 및 기본계획 수립 용역을 추진하였고,

○ 2016년도에는 개발제한구역 관리계획 협의, 도시계획시설 결정 후 2017년도에 지방재정 투융자(자체) 및 공유재산 관리계획 등의 행정절차를 걸쳐,

○ 현재 최종 절차인 실시계획 인가 및 실시설계 용역을

진행 중으로 한정된 재정여건 속에서 275억원의

토지보상비 등 막대한 규모의 사업비 확보 어려움으로 다소 지연되고 있는 것이 사실입니다.

○ 하지만 시에서도 생활체육에 대한 시민들의 관심과 수요가 지속적으로 늘어나고 있는 만큼 생활체육시설 활성화 및 시민 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록

사업비의 신속한 확보를 통한 거점별 생활체육시설의

조기착공에 최선을 다하고자 합니다.

○ 특히 지속적인 지가 상승을 감안 순차적 토지를 매입하기 위해 2019년 본예산에 생활체육시설 토지보상비

일부(20억)를 반영하여 시의회에 심의를 요청한 것처럼

사업별 단계적 추진과 함께 국도비 확보 등 별도의 재원확보 대책도 강구해 나가도록 하겠습니다.

○ 이상 답변을 마치겠습니다. 감사합니다.