죽율체육공원 도시관리계획 결정을 위한

시의회 의견제시의 건 검토보고서

□ 제안경위

1. 의안번호 : 제3026호

2. 제 출 일 : 2019.01.08.

3. 제 출 자 : 시흥시장(공원관리과)

4. 상정일자 : 2019.01.16. 제262회 시흥시의회(임시회) 도시환경위원회(1차)

□ 제안이유

○ 체육활동을 중심으로 주민들의 건강을 증진시키고 3세대를 아우르는 열린공간 조성으로 소통의 기회를 제공하며, 향토유적을 연계한 다양한 프로그램으로 지역에 대한 이해를 돕고자 함.

□ 주요내용

▣ 사업개요

○ 사 업 명 : 죽율체육공원 조성사업

- 의회 의견청취 대상 : 시흥 도시관리계획(공간시설:체육공원) 결정

○ 위    치 : 죽율동 615번지 일원

○ 사업시행자 : 시흥시

○ 사업규모 : 10,404㎡

○ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2020. 10월

○ 추정사업비 : 96억원(용역 및 부담금 7/ 보상 65/ 공사 24)

※ 지장물 보상비 등 추가에 따라 총사업비 변동가능

○ 도시계획사항 : 개발제한구역, 자연녹지지역

▣ 사업목적

○ 체육활동을 중심으로 주민들의 건강을 증진시키고 3세대를 아우르는 열린공간 조성으로 소통의 기회를 제공하며, 향토유적을 연계한 다양한 프로그램으로 지역에 대한 이해를 돕고자 함.

▣ 도시관리계획(공간시설:체육공원) 결정(안)

○ 공원 결정 조서

구분	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일
			기정	변경	변경후
신설	체육공원	죽율동 615번지 일원	-	10,404	10,404	-

○ 공원 (변경)결정 사유서

시설명	결정내용	결정사유
체육공원	• 체육공원 신설 - 위치 : 시흥시 죽율동 615번지 일원 - 면적 : 10,404㎡	• 체육활동을 중심으로 주민들의 건강을 증진시키고 3세대를 아우르는 열린 공간조성으로 소통의 기회를 제공하며, 향토유적을 연계한 다양한 프로그램으로 지역에 대한 이해를 돕고자 함

▣ 추진경위

○ 2017.  3월 : ‘18년 국토교통부 환경문화사업 공모신청

○ 2017.  6월 : ‘18년 국토교통부 환경문화사업 심사(서류, 현장)

○ 2017. 12월 : ‘18년 개발제한구역 환경문화사업 선정(광특 5억원)

○ 2018.  2월 : ‘19년 국토교통부 환경문화사업 공모신청

○ 2018.  3월 : 경기도 투자심사 승인

○ 2018.  9월 : ‘19년 개발제한구역 환경문화사업 선정(광특 10억원)

○ 2018. 10월 : 도시관리계획(시설결정, 공원조성계획) 등 용역 착수

○ 2018. 12월 : 주민설명회(1,2단지 입대위 등 주민 41명 참석)

▣ 향후계획

○ 2019.  2월 : 주민공람 및 도시관리계획 결정신청(승인권자 : 시장)

○ 2019.  3월 : 시 도시계획위원회 심의, 보상계획 공고

○ 2019.  4월 : 협의보상 추진

○ 2019.  6월 : 실시계획 인가, 경기도 계약심사

○ 2019. 10월 : 토지수용 및 착공

○ 2020. 10월 : 준공

▣ 도시관리계획 결정(안) 및 조성계획(안) : 별첨

□ 검토의견

○ 본 의견제시의 건은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조 및 동법 시행령 제22조에 따라 도시관리계획 결정을 위해 시의회의 의견을 청취하고자 하는 사안으로

‣ 해당 지역은 개발제한구역으로 지역 주민을 위한 운동 및 산책공간이 전무한 상황이므로 주민들의 건강 및 여가 활동을 위해 체육공간을 조성하는 것은 바람직한 조치로 판단됩니다.

‣ 다만, 그간 공원부지 인근에 마땅한 여가녹지가 없어 주민들의 요구가 많았던 만큼, 빠른 시일 내에 공원을 조성하도록 해야 할 것이며, 주민들이 만족하는 공원이 될 수 있도록 시설물 배치, 공원 운영·관리방안 등에 대해 사전에 주민들의 의견을 충분히 수렴하여 최대한 반영할 수 있도록 업무추진에 만전을 기해야 할 것입니다.

2019년 01월 16일

검토보고자  도시환경전문위원  박광목