서면질문

오이도 배다리 선착장에서 황새바윗길 부유식 잔교 설치 계획

제267회 시흥시의회(제1차 정례회) 시정질문

관   광   과

오이도 배다리 선착장에서 황새바윗길

부유식 잔교 설치 계획 (홍원상 의원)

【질문내용】

○ 시장이 약속한 오이도, 월곶 해양 경관 재조성 국민관광지화 사업 추진 진행 현황

□ 답변내용

○ 오이도, 월곶 해양경관 재조성 국민관광지화 사업 추진 진행현황에 대하여 답변 드리겠습니다.

○ 우선, 오이도 선사유적 정비사업은 6월말까지 박물관 내부  전시물 설치를 완료하여 7월말에 개관할 예정이며, 빨강등대 보수와 어촌체험ㆍ휴양마을 편의시설 설치도 진행하고 있으며,

○ 오이도의 미래비전과 관광활성화의 기반이 될 지방어항 지정과 어촌뉴딜 300 사업 추진을 위한 사전 절차를 추진하고 있습니다.

○ 월곶은 어항 기능을 회복할 수 있도록 월곶항 국가어항 개발사업과 월곶역세권 도시개발사업을 추진하고 있으며, 월곶  이미지 개선과 침체된 상권 활성화를 위하여 야간경관 조명시설 사업과 월곶 물량장 주변을 중심으로 공공미술 프로젝트 사업도 진행하고 있습니다.

○ 관광시장의 확대와 수요에 대응하고 시가 추구하는 미래관광비전 설정, 차별화된 지역관광자원화 및 진흥계획 수립을 위한 「시흥시 미래비전 관광종합 기본계획」 용역을 진행하고 있으며,

○ 또한 오이도를 특화하여 오이도 선사․해안문화특구계획의 변경 수립으로 사업의 현행화 및 신규사업 발굴을 위하여 특구계획 재수립 용역을 추진 할 계획입니다.

○ 주요 관광자원을 연계한 시티투어 사업과 다양한 생태체험  프로그램 운영으로 시민 만족은 물론 외부 관광객들이 휴족할 수 있도록 오이도ㆍ월곶 등 지역 특화 관광에 역점을 두고   추진하겠습니다.

【질문내용】

○ 어촌뉴딜 300사업에 황새바윗길 연장을 위한 수요조사서를 제출하였다고 하는데 그 결과에 대한 설명

□ 답변내용

○ 어촌뉴딜 300사업은 2018년도에 공모 신청하였으나 미선정 된 바 있습니다.

【질문내용】

○ 오이도 배다리 선착장에서 황새바윗길 부유식 잔교 설치 사업을 추진하기 위하여 군부대와 협의, 인천지방해양수산청에 해역 이용을 위한 협의 진행 사항

□ 답변내용

○ 오이도 갯벌탐방로 조성사업(황새바윗길 부유식 잔교 설치  사업)은 ‘시흥 오이도 선사ㆍ해안문화특구’ 특화사업 중의 하나로 3단계에 걸쳐 총 1,800m 조성계획이었으나, 현재  1단계로 200m를 조성 완료(2012. 6.)하였으며, 군부대  협의, 해역이용협의, 공유수면 점ㆍ사용승인 의제처리 등은 관계기관 협의를 완료한 바 있습니다.

〔작전참모처-1959(2011.8.9.), 문화체육과-8304(12.4.18.)〕

【질문내용】

○ 부유식 잔교 설치 사업을 3단계로 계획 수립하고, 제1단계 사업 후   중단이 되었는데, 제1단계 사업 시행에 필요한 사항을 관계기관과 협의 완료 하였는지?

□ 답변내용

○ 제2단계 사업(탐방로 687m연장) 추진을 위하여 기존 앵커  고정식으로 설치할 경우 안전사고 발생 우려가 있어 강관  파일 설치방식을 검토하였으나,

○ 약60억 원 이상의 공사비(지반여건에 따라 추가 비용발생),  강재부식에 따른 유지관리비(1.3억/년), 파일 항타시 갯벌   훼손 및 해양생태계 교란 등 심각한 해양오염이 우려되어  사업추진을 중단하였습니다.

○ 또한 2018.7.10. 환경단체인 저어새네트워크(인천환경운동연 등 7개 연합단체)에서 「옥귀도(황새바위)에 저어새 번식에 대한  대책 요청」공문을 시에 발송하여 향후 갯벌탐방로 조성 시에는 환경단체의 강력한 반발이 예상됩니다.

○ 현재 오이도 지역이 「2020. 어촌뉴딜300사업」대상지에 선정될 수 있도록 사업공모 준비단계에 있으며, 갯벌 탐방로 연장에 대하여는 어촌뉴딜300사업계획 수립 시 주민, 전문가, 환경단체 등의 충분한 의견수렴 과정을 거친 후 재추진 여부를 결정할 예정입니다.