서면질문

배곧2중학교의 2019년 9월

개교 가능 여부

제267회 시흥시의회(제1차 정례회) 시정질문

배 곧 사 업 과

배곧2중학교의 2019년 9월 개교 가능 여부 (홍원상 의원)

【질문내용】

○ 배곧2중학교의 2019년 9월 개교가 가능한지?

○ 만약 배곧2중학교 9월 개교 불가능하다면, 이에 따른 시민 불편을 최소화할 수 있는 대책과 향후계획은?

○ 홍원상 의원님께서 질문해주신 배곧2중학교의 2019년 9월  개교 가능 여부에 대해 답변 드리겠습니다.

○ 신축공사 개요

학교명	학급수	연면적	공사비	개교예정일
배곧해솔중	41	13,580㎡	23,182백만원	2019.9월

※ 공사기간 :‘18.10월 ~ (당초)‘19.08월 말 준공

(변경)‘19.10월 말 준공

○ 공사추진은 레미콘업체 파업, 건설노조 공사방해, 동절기 보양공사 등으로 인해 당초 계획보다 약 2개월 지연되고 있어

외부 전문공정관리 용역업체에 의뢰하여 공정만회 대책을 검토하였으나 현실적으로 당초 9월 개교 전까지 시설물 완공이 불가하다는 결과에 따라,

○ 공사 지연상황과 개교일 변경에 대해 학부모들에게 설명하고 이해를 구하고자 지난 5월 학부모설명회를 개최하였습니다.

○ 이 자리에서 학교시설물이 완공되는 11월 개교 시,

교원인사 및 중등학습권 보장을 확신할 수는 없다는 시흥교육지원청 의견에 대해 학부모들은 시설물이 공사 중이더라도   당초대로 9월 개교를 강행할 것을 촉구하고 있습니다.

○ 이에 대해 시흥교육지원청과 지속적으로 협의하여 9월 개교할 수 있는 방안을 검토하고 개교에 필요한 사항을 적극 지원하도록 하겠으며,

○ 배곧2중학교 신축공사 품질 확보 및 공사 추진에도 박차를 가해 하루라도 빨리 쾌적한 환경에서 학생들이 교육받을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.